Uchwała Nr XXIV/177/09
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 29 stycznia 2009 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Iławskiego na lata 2004 - 2013

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 
z roku 2001, Dz. U. Nr 142, poz. 1592, z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.
W uchwale Nr XXI/166/2004 z dnia 9 września 2004 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Iławskiego na lata 2004 – 2013 zmienionej uchwałami Nr XXVII/212/2005 z dnia 24 marca 2005 roku, 
Nr XXVIII/227/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 roku, Nr XXXI/270/2005 z dnia 30 września 2005 roku, Nr XXXII/275/2005 
z dnia 31 października 2005 roku, Nr XXXIII/280/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku, Nr XXXIV/288/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku, Nr XXXV/302/2006 z dnia 16 lutego 2006 roku, Nr XXXVI/310/06 z dnia 30 marca 2006 roku, 
Nr IX/59/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku, Nr XVII/118/08 z dnia 27 marca 2008 roku, Nr XVIII/131/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku, Nr XIX/143/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku oraz Nr XX/149/08 z dnia 25 września 2008 roku wprowadza 
się następujące zmiany w załączniku Nr 2:
1) zmienia się wiersze 143, 146 i dodaje się wiersze 185, 186, 187 i 188 – wiersze 143, 146, 185, 186, 187, 188 
     i rubryka „Razem” otrzymują brzmienie:

L.p.	Planowane inwestycje	Rok 2007 - wykonanie	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	2007 - 2013	
		w tysiącach złotych	
		Razem	Środki własne*	Inne środki**	Razem	Środki własne*	Inne środki**	Razem	Środki własne*	Inne środki**	Razem	Środki własne*	Inne środki**	Razem	Środki własne*	Inne środki**	Razem	Środki własne*	Inne środki**	Razem	Środki własne*	Inne środki**	Razem	Środki własne*	Inne środki**	
143	Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1208N Ogrodzieniec – Gardzień odcinek km 0+000-5+478 
Ogrodzieniec - Trupel	0,000	0,000	0,000	36,600	36,600	0,000	50,000	15,0001	35,000	3.067,163	894,5292	2.172,634	3.080,538	924,1613	2.156,377	3.016,777	905,0334	2.111,744	0,000	0,000	0,000	9.251,078	2.775,323	6.475,755	
146	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1231N Gierłoż – Zielkowo – Byszałd w miejscowości Byszwałd, Gmina Lubawa	20,496	20,496	0,000	33,184	33,184	0,000	1.551,891	427,9925	1.123,899	3.412,570	1.023,7716	2.388,799	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5.018,141	1.505,443	3.512,698	
185	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie 	0,000	0,000	0,000	833,440	833,440	0,000	1.500,000	1.500,000	0,000	1.466,560	1.466,560	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3.800,000	3.800,000	0,000	
186	Modernizacja bazy kształcenia zawodowego Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	415,167	62,275	352,892	1.323,305	198,496	1.124,809	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.738,472	260,771	1.477,701	
187	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1222N Lubawa – Rumienica – I etap długości 2,65 km	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	927,500	463,7507	463,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	927,500	463,750	463,750	
188	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1910N Susz – Kisielice na odcinkach 0+270-0+430, 2+006-5+906,6+306-6+806, 10+646-11+046, 11+346-12+746, 13+146-13+486, 13+600-14+860	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2.730,000	1.365,0008	1.365,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2.730,000	1.365,000	1.365,000	
	RAZEM	4.533,533	2.188,056	2.345,477	17.711,120	10.733,072	6.978,048	63.246,828	26.975,200	36.271.628	49.331,278	20.416,006	28.915,272	29.654,308	9.144,561	20.509,747	29.966,777	19.708,783	10.257,994	8.801,412	2.454,982	6.346,430	203.245,256	91.620,660	111.624,596	

1 w tym 10.000,- zł dotacja Gminy Kisielice
2 w tym 620.752,53 zł dotacja Gminy Kisielice
3 w tym 616.107,71 zł dotacja Gminy Kisielice
4 w tym 603.355,36 zł dotacja Gminy Kisielice
5 w tym 321.114,07 zł dotacja Gminy Lubawa
6 w tym 682.514,00 zł dotacja Gminy Lubawa
7 w tym, 231.875,- zł dotacja Gminy Lubawa
8 w tym, 297.500,- zł dotacja Gminy Kisielice i 385.000,- zł dotacja Gminy Susz

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Janusz Pszczoliński